* 입찰공고상 제작기간 및 실 제작기간

- 최초 6편성(60량) : 계약일로부터 36개월(납기일 2009.06.07, 시운전 시험기간 포함) ☞ 9개월 지체, 제작사가 코레일에 지체상금 814억원 지불

(1) Train-a-grande-vitesse(트레인-아-그란데-비테세) : 철도차량 정보 사이트, TGV 정보 모음(독일)

(2) Railway Gazette(가제트) : 세계 철도시장 뉴스 채널(온라인 뉴스 및 정기간행물 발간)

(3) bnet(비넷) : CBS의 비즈니스 뉴스 전문 사이트

(4) Train Web(트레인웹) - TGV : 철도차량 모음 사이트, TGV 정보 모음 페이지

<신영수 의원 해외 고속철 제작기간 조사결과>

제작사	프랑스 Alstom (알스톰)
계약국가	프랑스	모로코	프랑스	프랑스
모델명	TGV POS	TGV Duplex	TGV Duplex (3세대 신모델)	TGV SE
설계 ․ 제작기간	53개월	60개월	54개월	58개월
출처	Railway Gazette / Alstom 홈페이지 보도자료 / bnet	Alstom 홈페이지 보도자료	Alstom 홈페이지 보도자료	고속철도차량 유지보수론 / Train Web - TGV

제작사	독일 Siemens (지멘스)
계약국가	독일	독일 / 네덜란드	스페인
모델명	ICx (아이씨엑스)	ICE3 (이체3)	Velaro E
설계 ․ 제작기간	57개월	71개월	75개월
출처	Bloomberg Railway Gazette	위키피디아	위키피디아